설계변경 심의 의뢰서(1회)

공사명 : 2014년 중부수도사업소 포장복구, 시설물, 중구관내

상수도공사 폐기물처리용역(장기계속단가계약)

의 뢰 부서명	중부수도사업소 급수운영과
공사 감독원	지방시설주사 박혁순
검토 의뢰일시	2014. 12. 05

검 토 의 견 서

○ 공사명 : 2014년 중부수도사업소,포장복구,시설물,중구관내

상수도공사 폐기물처리용역(장기계속단가계약)

○ 검토일시 : 2014.12. 05

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

급수운영과장

김영삼

12/05

김영삼

적정함

위    원

시설관리팀장

최명익

최명익

적정함

위    원

주무관

이태원

이태원

적정함

위    원

급수설비팀장

이병운

이병운

적정함

위    원

주무관

최현태

최현태

적정함

담    당

주무관

박혁순

박혁순

설계변경 심의 설명서

□ 공사 개요

○ 용 역 명 : 2014년 중부수도사업소 포장복구,시설물,중구관내

상수도공사 폐기물처리용역(장기계속단가계약)

○ 용역개요

- 당초 : 폐기물운반  7,790㎥, 폐기물처리 : 14,317ton                   - 변경 : 폐기물운반 11,956㎥, 폐기물처리 : 20,964ton                ○ 계약금액

- 당초 : ************

- 변경 : *************

○ 용역기간 : 2014.05.28. ~ 2015.05.31

**************************

□ 설계변경 세부내용 및 사유

○ 변경사유 : 신공종 발생 및 물량 증․감

구 분	폐기물 운반(㎥)		비고(증․감)	폐기물 처리(ton)		비고(증․감)
	당 초	변 경		당 초	변 경
폐아스팔트	1,840	1,536	감) 304	4,324	3,609	감) 715
폐콘크리트	270	250	감) 20	621	575	감) 46
폐토석	5,680	3,690	감)1,990	9,372	6,088	감) 3,284
폐토사	-	6,480	증)6,480	-	10,692	증)10,692

○주요공종 물량변경

○ 용역비 변경내역

구 분	당 초	변 경	증․감
용 역 비	************	*************	없음

붙임: 변경 설계도서 1부. 끝.