투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강서구청장(도로과장)
(경유)
제목	도로굴착허가 기간연장 신청(방화)

1. 강서구 도로과-8857호(2013. 5.31.)와 관련입니다.

2. 우리시에서 시행중인『방화대교 남단 접속도로 건설공사』와 관련하여 상기대호로 도로굴착 승인되어 작업을 진행하던중,안전사고 발생으로 공사를 중단하였습니다만 최근 고용노동부로부터 작업재개 승인되어 구조물 추가 설치 및 원인자 복구 등을 위해 기간 연장이 필요하여 아래와 같이 도로 굴착 기간 연장 신청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 방화대교 남단 접속도로 건설공사

나. 공사개요 : 도로개설 B=5.7~9m, L=3,021m, 램프교 L=756m

터널 L=949m(분리형,A=454m, B=495m)

다. 공사기간 : 2005.10. 5. ~ 2015.10.31.

라. 굴착위치 : 강서구 방화동 52-3번지

마. 도로 굴착 기간 연장요청 내역

- 당초 : 2012. 7. 1. ~ 2014. 6.30.

- 변경 : 2012. 7. 1 ~ 2015.10.31.

바. 감 리 사 : ㈜삼보엔지니어링 (☏2662-1256)

사. 도 급 사 : 금광기업(주) (☏2666-6782).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	홍상필		터널건설과장	권혁대		토목부장	12/05 노우성
협조자	주무관	박근우
시행	토목부-24093	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개