투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(공원조성과장)
(경유)
제목	추가 과업에 따른 소요비용 등 적정성 검토 회신

1. 공원조성과-13612(2014.11.18.)호와 관련입니다.

2.「마포 석유비축기지 재생 및 공원화사업」기본 및 실시설계의  추가 과업에 따른 지반/지표조사에 대한 적정성 검토 결과를 아래와 같이 회신하오며, 추가 과업 중‘사전굴토’는 굴토 범위와 물량 변동성으로 인한 소요비용 등 적정성 검증이 어려운 실정으로 주관 부서인 귀부서에서 판단 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역사 : ㈜알오에이건축사사무소(대표 박정열) 외 5개사

나. 추가과업 : 사전 굴토작업 및 지반/지표조사

다. 소요비용(지반/지표조사) : 101,401천원(첨부 내역서에 의함)

1) 부가세 미포함 금액임

2) 지층별 시추 내역 등은 향후 지반조사 완료 후 정산 예정임

3) 건설공사 표준품셈에 따라 산출하였으며, 품셈에 없는 항목은 견적가격을 적용하였음

라. 적정성 검토 의견 : 시험 및 조사 항목과 수량이 사면의 안정 및 보강, 내진 등의 제반 설계를 위한 기초자료 수집에 적정하며, 소요비용은   첨부된 내역서와 같이 적정하게 산출하였음.

첨 부 : 소요비용 내역서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	조영두		건축총괄과장	강성욱		건축부장	전결 12/05 김우성
협조자	주무관	장충근
시행	건축부-14661	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02 3708-2656	/전송	02-3708-2659	/		/	대시민공개