문서번호	정수과-3565
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
임태섭		조현태	12/05 임건혁
협조

정수처리시설 청소용역

설계변경 심의회 개최 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강북아리수정수센터

(정수과)

『정수처리시설』청소용역

설계변경 심의회 결과보고

우리 센터 정수처리시설 청소용역에 대하여 설계변경 사항이 발생하여 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 개    요

○ 용 역 명 : 강북아리수정수센터 정수처리시설 청소용역

○ 용역개요

- 주벽 청소 : 217,696㎡

- 슬러지 청소(침전) : 1,452㎥, 슬러지 청소(농축) : 3,530㎥

- 정수지 청소(주벽) : 19,797㎡,  정수지 청소(바닥) : 17,200㎡

- 상등수 이송 :  2회

○ 도급액

- 당 초 : 156,056,410원

- 변 경 : 155,797,400원

□ 심의회 개최

○ 심의일시 : 2014년 12월 5일(금) 14:30~15:00

- 심의위원 : 조현태, 하수용, 홍기웅, 이상훈

- 심의내용

□ 청소용역을 수행함에 있어 계약물량과 시공물량의 일부 공종에 증․감

사항이 발생하여 정산 변경설계 수행

□ 물량변동사항

구 분	단위	당 초	변 경	증, 감
주 벽 청 소	㎡	214,955	217,696	증 2,741
슬러지 청소	㎥	5,042	4,982	감 60
정수지 청소	㎡	31,753	36,997	증 5,244
상등수 이송	회	2	2	-

□ 심의결과

심의 검토사항	검 토 의 견
설계변경의 타당성	변경된 설계서 적정
단가 산출 적정여부	계약단가 적용
계약 변동(증․감)물량 계약단가 낙차율 적용범위(±3％)내 적용 적정 여부	적정
제경비 적정 산정 및 적용 적정성	제비율 검증 프로그램 확인
각종 제반규정 준수 여부	적정

따로붙임 : 1. 청소용역(설계변경) 검토의견서 4부.

2. 제비율검증 확인서 1부.

3. 정산설계변경 내역서 1부.  끝.