함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	천정텍스 철거 및 설치공사 설계변경 시행

1. 우리정수센터에서 시행중인 『강북정수센터 천정텍스 철거 및 설치공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 강북정수센터 천정텍스 철거 및 설치공사

나. 도 급 자 : (주)만영건설   대표 안흥식

다. 도 급 액 : 154,534,100원

라. 계약년월일 : 2014. 10. 15

마. 착공년월일 : 2014. 10. 22

바. 준공기한 : 2014. 12. 10

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

아. 설계변경 내역

구 분	당초금액	변경금액	증	감
총공사비	154,534,100	149,600,000	-	4,934,100
도급비	154,534,100	149,600,000	-	4,934,100

따로붙임 1. 변경설계 내역서       1부.

2. 설계변경 사유서      1부.

3. 설계변경 심의위원회 개최결과 보고서   1부.    끝.

주무관	김동우		정수시설과장	안길찬		강북아리수정수센터소장	12/05 박기석
협조자	주무관	하수용
시행	정수시설과-2807	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 고산로 171	/
전화	02-3146-5874	/전송	02-3146-5807	/	dwoo7@seoul.go.kr	/	대시민공개