문서번호	시설보수과-4546
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	12/05 代홍영두
협 조

『중랑교 보수ㆍ보강공사』

점검통로 실정보고 검토

2014. 11

성동도로사업소

【시 설 보 수 과】

『중랑교 보수ㆍ보강공사』

점검통로 실정보고 검토

우리 사업소에서 추진중인 『중랑교 보수ㆍ보강공사(3차)』와 관련하여 감독기관의 중랑교 점검통로 실정보고에 대한 검토 보고임

Ⅰ		추 진 개 요

공 사 명 : 중랑교 보수ㆍ보강공사

공사기간 : 2013.05.02 ~ 2014.12.31(총차)

(3차 : 2014.10.14 ~ 2014.12.31)

도 급 액 : 3,003,708천원(3차 : 420,433천원)

공사개요 : 교면포장 30a, 슬래브 강결 154m, 난간 철거 및 재설치       308m, 신축이음 교체 200m, 교량받침 교체 168개소 등

도 급 자 : 유성건설주식회사 대표 이영주

Ⅱ		실정보고 사항

관련근거

○ 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-20877호(2014.12.04.)

실정보고 내용

○ 기존 점검통로(재활용)를 철거 및 재설치로 계획되어 추진 중

철거 전 지장물(홍수통제소, 펌프인입선 등) 통과지점의 자재가

파손되어 있는 상태로 보완정비가 요구됨(발판 2개소외 7종)

감독기관 검토 내용

○ 점검통로 일부 파손된 자재의 신제품 교체 설치로 안전시설 확보

※ 주요공종 변경사항〈증 2,519천원〉

공 종	규 격	단위	수 량		비고(증감)
			당 초	변 경
점검통로 보완	발판2개소외 7종	식	0	1	증) 1

Ⅲ		조치 계획

○ 상기와 같이 실정보고에 대하여 검토한 바, 감독기관의 검토의견과 같이 시행함이 타당할 것으로 사료되어 본 공사에 반영하도록 조치하고,

○ 공사비 증가사항에 대하여는 추후 설계변경시 정산 반영하여, 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 실정보고(시설관리공단) 각 1부.  끝.