내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	이화동 빈집 리모델링 실시설계 및 감리용역 설계변경 의뢰

1. 주거환경과-5262(‘14.6.17)호, 재무과-35857(’14.7.17)호, 주거환경과-10633(‘14.12.2)호와 관련입니다.

2. 이화동 빈집 리모델링 기본 및 실시설계 용역을 추진하는 과정에서  아래와 같이 설계변경(공기연장)하고자 하오니 변경계약 등 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 이화동 빈집 리모델링 실시설계 및 감리 용역

나. 업체명 : ㈜유타건축사사무소

다. 설계변경 내용

구 분	변경전	변경후	비고
용역기간	‘14.7.11 ~ ’14.12.7	‘14.7.11 ~ ’15.4.7	증 120일
변경사유	공사시행 관련 관련부서 협의기간이 추가 소요되어 기간 연장

붙임 1. 설계변경 방침서 1부.  끝.

	주거환경과장
주무관	권경희		주거환경계획팀장	정거택		주거환경과장	12/05 최성태
협조자
시행	주거환경과-10835	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 31 서울시청 주택정책실 주거환경과	/
전화	02-2133-7249	/전송	02-2133-0753	/	kkh1228@seoul.go.kr	/	부분공개