문서번호	시설과-7565
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	시설과장		관리부장
이강호	이상국	공헌구		12/05 정상택
협 조	총무과장		代백철
	주무관		김현정

서울대공원 남미관 보수공사 폐기물 처리용역 설계변경 보고(안)

2014. 12

서울대공원

(시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	과천시청	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 서울대공원 남미관 보수공사 처리용역 -

설계변경 보고(안)

우리 공원에서 추진하고 있는 ‘서울대공원 남미관 보수공사 폐기물처리 용역’ 에 대하여 폐기물 물량이 증가되어 설계변경 시행코자 합니다.

Ⅰ		사업개요

구 분	내 용	비 고
용 역 명	서울대공원 남미관 보수공사 폐기물처리 용역
용 역 비	5,913,000원
계약업체	㈜벽성그린산업 대표이사 : 황 윤 남
용역기간	2014. 9. 29~2014 12. 10

Ⅱ		주요 변경내용

□ 야외 방사장 바닥 노후 콘크리트 철거 등 공사추가 인한 폐기물 증가

□ 현장사진

Ⅲ		세부변경내역

공종별	규격	단위	변 경 전	변 경 후	증․감(원)
폐기물 운반비	혼합폐기물	톤	40	45.37	증) 697,520
	폐콘크리트	톤	70	114.43
폐기물 처리비	혼합폐기물	톤	40	45.37	증)891,571
	폐콘크리트	톤	70	114.43
부가가치세					증) 158,909
[합 계]					증) 1,748,000

Ⅳ		검토결과

□ 증가된 폐기물 물량에 따라 『서울대공원 남미관 보수공사 폐기물 처리용역』에 대하여 설계변경을 시행코자 함

□ 용역비 변경증감액(용역기간 변경없음)

구분	계약금액
	당 초	변 경	증 감
서울대공원 남미관 보수공사 폐기물 처리용역	5,913,000원	7,661,000원	증) 1,748,000원

□ 예산집행 계획

○ 증가되는 용역비 1,748(천원)에 대해서는 『서울대공원 긴급 안전예          산(예비비)』1,225,000(천원)의 집행잔액 또는 낙찰차액 사용

○ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종 보존, 공원시설 보수 및 정비, 시설비 - 예비비

따로붙임 : 1. 폐기물 처리용역 설계변경 요청서 1부.

2. 계량증명서 각 1부. 끝.