투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경계약 의뢰(2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사) - 북부

우리사업소에서 시행중인 『2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3회) 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)-북부

나. 공사기간 : 2014.04.11 ~ 2015.02.28

다. 공사개요 : 불량맨홀정1비 711개소

라. 도 급 자 : 삼서건설(주) 대표 나남열

마. 변경사유 : 물량 증,감

바. 변경내역(2회)

구 분		당 초	변 경	증,감
총 공 사 비		680,000,000	680,000,000	-	-
도급비	공급가액	609,090,910	612,591,819	증	3,500,909
	부가가치세	60,909,090	61,259,181	증	350,091
	계	670,000,000	673,851,000	증	3,851,000
이 전 비		10,000,000	6,149,000	감	3,851,000

사. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발)

노후포장도로정비공사, 시설비및부대비, 시설비

첨부 : 설계변경(3회) 관련도서  1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최완		도로보수과장	12/05 代최진규
협조자
시행	도로보수과-10673	(		)	접수		(		)
우	141-060	서울시 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소 시설보수과 1층	/
전화	02-944-5455	/전송	02-945-5073	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개