투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	양화한강공원 친수공간 조성공사 기성처리 요청(1차 2회기성)

1. 시설관리공단 공사감독3처-11983호(‘14.12.2) 와 관련입니다

2. 양화한강공원 친수공간 조성공사 감독기관인 시설관리공단 이사장으로부터 동 공사에 대한 기성요청서(1차 2회기성)가 접수되어 붙임과 같이 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 공 사 명 : 양화한강공원 친수공간 조성공사

나. 공사기간 :‘13.12.27~’14.12.26

다. 도 급 액 : 2,575,760천원(1차공사)

라. 도 급 자 : 태흥개발(주) 신현종,  정나라건설(주) 이완규

마. 기성금 신청내역(1차 2회기성)

(단위 : 천원)

계 약 액 (1차공사)	선급금액	전 회 기성금액	전 회 선급금 공제액	금 회 기성금액	금 회 선급금 공제액	금 회 기성신청 금 액
2,575,760	813,318	623,348	247,419	305,919	121,425	184,494

붙 임 1. 시설관리공단 공사감독3처-11983호(‘14.12.2) 사본 1부

2. 기성검사 감독조서 1부

3. 기성검사원 1부

4. 기성내역서 1부. 끝.

	생태공원과장
주무관	이옥상		생태공원과장	12/05 최병언
협조자
시행	생태공원과-2775	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25(성동구 강변북로 257) 한강사업본부 공원부 생태공원과	/
전화	3780-0859	/전송	3780-0745	/	losthis@seoul.go.kr	/	대시민공개