	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(5회)시행［(관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)］

우리사업소에서 시행중인 『관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(5회) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 3. 21 ~ 2015. 02. 28.

다. 공사개요

o  불량맨홀정비 843개소(주간 423개소, 야간 420개소)

라. 도 급 비 : 741,646,000원

마. 도 급 자 : 태평림건설(주) 대표 이동균

바. 설계변경내역

o 정비수량(당초 843개소, 변경 872개소)

o 도급비

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비 고(증·감)
총 공사비		750,000,000	800,000,000	증) 50,000,000
도급비	공 급 가 액	674,223,637	719,208,182	증) 44,984,545
	부가가치세	67,422,363	71,920,818	증) 4,498,455
	계	741,646,000	791,129,000	증) 49,483,000
폐기물 처리비		8,354,000	8,871,000	증) 517,000

사. 변경 사유 : 추가예산 재배정에 따른 공사비 증액

아. 예산 과목

o 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비(시설비)

※ 품의번호 : No 72(2014. 12. 4.)

따로붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.   끝.

주무관	김종범		도로보수과장	손수희		동부도로사업소장	12/05 송상영
협조자	주무관	박일연		주무관	이민호		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-7160	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지) 동부도로사업소 도로보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2040-0350	/전송	2040-0307	/	kjb61@seoul.go.kr	/	대시민공개