문서번호	시설보수과-5012
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설보수과장		남부도로사업소장
장창원	금종융	김찬구		12/05 민승기
협 조

보라매고가도로 보수공사 현장실정 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 ■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

보라매고가도로 보수공사 현장실정 검토보고

우리사업소에서 시행중인 「보라매고가도로 보수공사」의 현장에 대하여 시설관리공단에서 요청한 현장실정 보고의 검토보고임

공사개요

○ 공 사 명 : 보라매고가도로 보수공사

○ 공사기간 : 2014.6.5.~12.21

○ 공 사 비 : 1,816,206,200원 (총공사비 2,100,000,000원)

※ 낙찰차액 267,853,800원 , 계약심사 감액 15,940,000원

○ 공사개요 : 방음벽 철거 및 설치 1,541m,

균열보수 149m, 단면보수 1,329㎡, 배수관교체 223m

○ 도 급 자 : 포코건설(주) 대표 홍성표

○ 감 독 자 : 서울시 시설관리공단(공사감독1처 박민현)

공사현장에 대한 보고사항

구 분	내 용	비고
보고내용	- 공사실정(노치외 2건)에 대한 보고 · 교량하부 물끊기공 추가 설치 · 방음벽 지주용 볼트 캡 설치 · 공사안내간판을 베너간판으로 변경 설치	시공사에서 실정보고
	- 보수현황 물량조사에 대한 보고 · 콘크리트 열화구간 조사 후 추가물량 확인 및 보수 · 노후 신축이음장치 물량 추가 확인 및 보수 · Steel Box 내부상태 부식 확인 및 보수 · 배수관 노후도를 감안하여 배수관 교체 위치조정	사업소에서 감독기관에 확인토록 지시 ※시설보수과 -4389 (‘14.10.23)

구 분	내 용	비고
변경사유	- 물끊기공 추가설치 · 교량하면 우수유입으로인한 백태 및 구조물열화를 방지하기 위하여, 우수 유입부에 물끊기공을 추가 설치하여 구조물 열화를 최소화	물끊기공 증) 41m
	- 방음벽 지주용 볼트캡 설치 · 보라매 좌안(기존 사업 준공분)은 설치하였으나, 현재 사업구간은 미반영이며, 지주용 볼트로 인한 차량접촉 사고와 볼트부식을 방지	볼트캡 증) 5,400ea
	- 공사안내간판을 베너간판으로 변경 설치 · 설계내역에 공사안내간판 7개소가 있으나, 노견이 좁고 보도가 없어 설치가 어려운 것을 감안 베너간판으로 변경하여 운전자 시인성을 확보	공사안내간판 감) 7ea 베너간판 증) 50ea
	- 콘크리트 열화구간 조사에 따른 단면복구 물량 추가 · 하부 슬래브하면, 교각 열화부 및 방음벽을 지지하는 방호벽 상단 등 추가로 확인된 콘크리트 열화구간 보수	단면보수(t=20㎜) 증) 145㎡
	- 노후 신축이음장치 물량 추가 · 신축이음장치 6개소의 누수로 박스 하단부 부식 및 교각부 백태가 발생하고 있으며 도림천을 이용하는 시민 보행환경 개선이 필요함	신축이음 New f/j #80 증) 43.2m New f/j #120 증) 14.4m New f/j #160 증) 28.8m
	- Steel Box 내부상태 부식에 대한 물량 추가 · 강박스 내부에 다발적인 자연부식 및 신축이음 주변 누수로 부식 발생된 317개소에 대한 조치 필요	강박스 내부도장 증) 1,446㎡
	- 배수관 노후도를 감안한 위치조정 · 배수관 노후로 인한 낙수가 심하여, 시민들의 민원이 많은 곳을 우선적으로 교체	물량변경 없음

○ 사업 물량 변동 및 공사비 증감 내역

구 분	내 용	증감	비고
공사비 증감	- 물끊기공 물량 증가 41m × 24,400원/m = 증) 1,000천원 - 방음벽 지주용 볼트캡 물량 증가 5,400ea × 2,300원/ea = 증) 12,420천원 - 공사안내간판 물량 감소 7ea × 206,200원/ea = 감) 1,433천원 배너간판 물량 증가 50ea × 84,600원/ea = 증) 4,230천원 - 단면복구 물량 증가 145㎡ × 166,800원/㎡ = 증) 24,186천원 신축이음장치 New f/j #80 물량 증가 43.2m × 1,584,200원/m = 증) 68,437천원 신축이음장치 New f/j #120 물량 증가 14.4m × 2,005,900원/m = 증) 28,885천원 신축이음장치 New f/j #160 물량 증가 28.8m × 2,259,800원/m = 증) 65,082천원 Steel Box 내부도장 물량 증가 1,446㎡ × 42,900원/㎡ = 증) 62,033천원	증)264,840천원

검토내용

○ 시공사에서 실정보고한 교량하부 물끊기공 추가설치, 방음벽 지주용 볼트 캡 설치는 사업완료후 하자방지를 위하여 필요하고,

공사안내간판을 베너간판으로 변경하는 것은 공사를 안전하게 시행하기 위하여 필요한 조치로 사료됨

○ 우리사업소에서 감독기관인 시설관리공단에 확인토록 지시한

콘크리트 열화구간의 추가물량, 누수되는 노후 신축이음장치, Steel Box 내부 강재에 발생한 강구조 부재 결함, 배수관에 발생하는 누수에 대한 조치는

시설물의 장기적인 공용성 확보와 민원방지에 반드시 필요한 사항임

행정사항

○ 서울시 시설관리공단에는 위와 같은 검토사항을 시행토록하고, 추가 공사비는 추후 설계변경에 반영토록 통보

○ 공사비 증가(264,840천원)에 따른 부족예산은 낙찰차액

(267,853천원)에서 조치

붙  임 :  1. 공사실정보고서(물끊기공 외 2건) 1부.

2. 작업지시(물량조사)에 대한 회신  1부.  끝.