투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	『서울대공원 남미관 보수공사 폐기물처리 용역』설계변경 시행

1. 시설과 – 7565호(2014.12.05)와 관련입니다

2. 우리 대공원에서 시행중인“서울대공원 남미관 보수공사 폐기물처리 용역”과 관련하여 폐기물 물량이 증가되어 설계변경 시행코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울대공원 남미관 보수공사 폐기물처리 용역

나. 용역공사금액 : 금5,913,000원

다. 용역기간 : 2014. 9. 29. ~ 2014. 12. 10

라. 용 역 자 : ㈜벽성그린산업 대표 황 윤 남

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
총 용역비	5,913,000	7,661,000	증 1,748,000
공 급 가 액	5,375,455	6,964,546	증 1,589,091
부가가치세	537,545	696,454	증 158,909

바. 설계변경 사유 : 공사 공종 추가로 인한 폐기물 물량 증가

사. 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종 보존, 공원시설 보수 및 정비, 시설비 - 예비비

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계서 1부. 끝.

	시설과장
★주무관	이강호		시설과장	12/08 공헌구
협조자	주무관	이상국		주무관	김희준
시행	시설과-7599	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7412	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개