문서번호	스포츠마케팅과-12235
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		스포츠마케팅과장		체육시설관리사업소장
차선동		代김태종		12/08 박준양
협 조
	운영기획과장				김남대
	시설개선과장				代박관현
	주무관				최웅의

제1수영장 환경개선에 따른 휴장 계획

2014. 12

체육시설관리사업소

(스포츠마케팅과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제1수영장 환경개선에 따른 휴장 계획

우리 사업소 제1수영장 환경개선을 실시하여 쾌적한 이용환경 조성 및 노후된 시설물의 교체·보수하여 이용시민의 안전 및 불편함을 최소화하여 이용활성화를 제고하고자 함

Ⅰ		운영 및 공사 개요

운영개요

❍ 시설현황

건축연면적	시설면적	주요시설	준공일자
22,479㎡	8,073㎡	- 경 영 풀 : 1,250㎡(25m×50m) - 다이빙풀 : 625㎡(25m×25m)	`80.12.30

❍ 프로그램 운영현황

구 분	운영시간	대상	비 고
월 회원	06:00 ~ 21:00	어린이 ~ 성인	수영, 아쿠아로빅, 수구 등
주말자유수영	09:00 ~ 17:00	어린이 ~ 성인	토요일 운영
시설대관	06:00 ~ 08:00	어린이 ~ 성인	월 ~ 금
	16:00 ~ 18:00
	19:00 ~ 21:00

공사개요

❍ 공사기간 : `15년 2월 1일 ~ 2월 28일

❍ 공사내용

- 제1수영장 경영풀·다이빙풀 욕수 교체 및 경영풀 수위조절판 보수

- 기계실 수위조절탱크 교체 공사

- 바닥 논슬립 시공

- 수영장 벽체 도장 및 여자샤워장 드레인 시공

Ⅱ		세부휴장계획

휴장계획

❍ 휴장기간 : `15년 2월 1일 ~ 2월28일(피티니스센터 기존과 동일 운영)

- 2월은 설날연휴(3일)과 짧은 일수(28일)로 이용회원 불편 최소화

❍ 휴장에 따른 조치 사항

- 이용회원 유·무선 안내 및 전화응대

- 휴장안내문 게첨 및 온라인 표출

- 휴장전 강습 중 휴장 구두 안내

❍ 공무직 및 기간제근로자 업무 지원

구 분	근무시간	근무인원	주요업무
공무직	06:00~15:00	1	- 새벽·저녁 헬스장 안내 및 회원관리 - 업장 청소 지원 및 물품관리 - 20일부터 회원 접수 업무
	09:00~18:00	5
	13:00~22:00	1
생활체육강사 (수영강사)	09:00~18:00	13	- 회원관리 업무 - 수영장 운영 민원 상담 - 업장 내 공사진행 사항 보고 - 업장 수시 안전 점검
시간강사	미근무	7	- 강사료 미지급

환경개선 및 공사계획

❍ 경영풀 및 다이빙풀

- 제1수영장 경영풀·다이빙풀 욕수 교체 및 경영풀 수위조절판 보수

․욕수교체(경영풀 2,500t + 다이빙풀 2,500t) 및 욕조청소

- 다이빙풀 내부 및 수영장 벽체 도장

․친환경세라믹 및 수성페인트 도장

❍ 남·여자 샤워장

- 바닥 논슬립 시공

- 여자 샤워장 드레인 공사

․샤워장의 원활한 배수를 위한 드레인 추가 설치

❍ 기타사항

- 기계실 수위조절탱크 교체

․장기간(30년) 사용으로 물탱크 누수 발생

Ⅲ		행정사항

업무분담

부 서	소관업무	비 고
생활체육반	- 총괄 관리 운영 및 시설 안전 점검 - 공무직 및 기간제근로자 관리 - 수위조절판 보수·보강	스포츠마케팅과
경영기획반	- 소요예산 배정	운영기획과
건축반	- 논슬립 시공 및 벽체 도장 - 트레인 설치 및 트랜치 커버 교체 - 난간철거·교체 및 샤워장 선반 설치	시설개선과
설비반	- 기계실 수위조절탱크 교체	시설개선과

소요예산 : 금184,151천원

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 잠실운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

노후체육시설개보수사업, 잠실운동장시설개보수, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

❍ 생활체육반 : 금20,000천원---  공공운영비(201-02)

- 경영풀 수위조절판 보수·보강 및 내부 청소

❍ 설비반 : 금40,000천원 ---- 시설비(401-01)

- 기계실 수위조절 탱크 교체

❍ 건축반 : 금124,151천원 --- 시설비(401-01)

- 논슬립 시공 : 금105,600천원

- 도장 및 트레인 설치 : 금18,551천원

❍ 특이사항 : 상기 예산은 개략공사비로 규모에 따라 다소 변동 가능하며, 일부는 `14년 예산 활용하여 집행

추진일정

❍ `14년 12월 : 시설환경개선 휴장계획 수립

❍ `14년 12월 : 공사업체 선정 및 계약

❍ `14년 12월 ~ `15년 1월 : 휴장 안내문 게첨 및 휴장안내

❍ `15년 01월 31일 : 경영풀 및 다이빙풀 욕수 배수

❍ `15년 02월 01일 ~ 02월 23일 : 환경개선 공사 시행

❍ `15년 02월 24일 ~ 02월 28일 : 경영풀·다이빙풀 담수 및 온수조절

❍ `15년 02월 24일 ~ 02월 28일 : 기존회원 및 신규회원 이용접수

❍ `15년 03월 02일 : 제1수영장 정상 운영