투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한연기 의뢰(중랑캠핑숲 내 청소년 모험의숲 조성사업 기본 및 실시설계용역)

1. 시설과-8632(2014.12.5)호와 관련입니다.

2. “중랑캠핑숲 내 청소년 모험의숲 조성사업 기본 및 실시설계용역” 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 하니 조치 하여 주시기 바랍니다.

가. 용역현황

- 용 역 명 : 중랑캠핑숲 내 청소년 모험의숲 조성사업 기본 및 실시설계용역

- 용역기간 : 2013. 10. 14 ~ 2014. 12. 13

- 도 급 비 : 39,704,970원

- 도 급 사 : 안스디자인 대표 안영애

나. 준공기한 연기

용 역 명	계약일	착공일	준 공 기 한		비 고
			당 초	변 경
중랑캠핑숲 내 청소년 모험의숲 조성사업 기본 및 실시설계용역	‘13.10.14	‘13.10.14	‘14.12.13	‘15.1.31

다. 연기사유 : 서울시도시공원위원회 심의에 따른 후속조치로 매점 등 건축물 실시설계 추가공정 발생

첨부  1. 방침서 1부.

2. 준공기한연기의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	이동헌		주무관	남상국		시설과장	12/08 함석주
협조자
시행	시설과-8668	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관2층	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02)3783-5919	/전송	02)3783-5969	/	oil0824@seoul.go.kr	/	대시민공개