문서번호	도로보수과-7206
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
박일연		손수희	12/08 송상영
협조

지하철919공구 추진 현황보고 설명회

2014.  12.

동부도로사업소

[도로보수과]

지하철 919공구 추진현황 보고

석촌동 일대에서 발생하는 도로함몰 및 최근 주택기울어짐 등의 사고발생으로 지역주민의 불안감을 해소하며 재발방지를 위한 지하철공사(919공구) 추진현황 보고회 실시.

『석촌동일대 사고원인조사 및 대책마련 T/F운영 관련』

- 행정2부시장 방침 제 366호(‘14.11.26)

Ⅰ		919공구 추진현황 보고

○ 일  시 : 2012.12.01.(월) 16:00 ~ 17:20

○ 장  소 : 동부도로사업소 소장실(2F)

○ 참여자 : 동부도로사업소장, 도로보수과장, 박일연

지하철919공구 책임감리원 수성엔지니어링 연규범

지하철919공구 현장소장 삼성물산 김용희

Ⅱ		주요 보고내용

○ 쉴드터널 공사관리 개선 T/F팀 자문회의내용 및 자문안건 설명

- 상선잔여구간 135m 자문(신종호교수 외 9명)

○ 자문조치내용검토 중

- 다양안별검토 중(지반보강후 상선 쉴드TBM시행, 상·하행선 병행     하여 부진한 공기해소, 공법변경 등)

- 쉴드TBM 기능공 경험자모집 및 추가확보 중

○ 공사관리 주요개선사항

- 그라우팅(차수개념 저압주입 지상그라우팅검토)

- 계측관리(터널/지장물, 지중침하 자동계측기설치)

- 시공관리(발생토사용적/중량관리 병행)

Ⅲ		우리사업소 요구사항

○ 석촌지하차도 정밀안전진단 시행자료요구(지반조사자료)

○ 석촌지하차도 진단비용은 삼성물산에서 지원(서울시 T/F팀 업무

재분장 사항임)

○ 석촌지하차도 동공구간 채움이후 관리계획 조속제출

○ 지하철공사구간 및 석촌지하차도 공사내용 업무추진사항 공유

Ⅳ		행정사항

○ 지하철 9호선 3단계 공사관련자 합동회의실시

- 일  시 : 2014. 12. 10.(수) 14:00~16:00

- 장  소 : 동부도로사업소(2층) 회의실

- 참석자

지하철 9호선 3단계 공사구간 담당과장, 지하철 9호선 3단계

공사구간 감리단장, 송파구청 도로과장, 강동구청 도로과장

- 주요안건

· 지하철 공사구간 도로 및 도로 시설물의 안전한 유지관리 방안

· 지하철 공사구간 포장복구 관련 사항

· 지하철공사 관련 시민 교통불편 저감 방안 등.  끝.