과 장		12/08 국중진		팀 장	홍수종		심사자	하승환		설계자	최영서	설 계		심 사		결 재
												2014년 12월		2014년 12월
설 계 서(3차 변경)
	공사명 : 2014년 도로손상부분 긴급복구공사(연간단가)-3차 설계변경
	구 분					금 액									비 고
						당 초			변 경				증 ․ 감
	총 공 사 비					1,020,591,000			1,135,761,000				증 115,170,000
	도급비		공 급 가 액			927,810,000			1,032,510,000				증 104,700,000
			부 가 가 치 세			92,781,000			103,251,000				증 10,470,000
			계			1,020,591,000			1,135,761,000				증 115,170,000
□ 공사개요 ○ 소파포장복구 당초 121a -----> 변경 111a ○ 절삭후아스콘덧씌우기 당초 326a -----> 변경 521a