투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	시설공사 계약의뢰(7차 2회)-동부2공구

우리본부에서 시행중인 『동부간선도로확장공사(2공구)』에 대하여 아래와 같이 계약금액을 조정하고자 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 동부간선도로확장공사(2공구)

나. 도 급 비 : 170,394백만원

다. 공사기간

전체 : 2008.12.30. ~ 2015.12.31.

7 차 : 2014. 3.27. ~ 2015. 6.30.

라. 도 급 자 : (주)한라 대표 최병수

마. 예산과목 :

- 광역교통시설특별회계,도로건설,광역도로건설,동부간선도로확장(녹천교~의정부시계),시설비 및 부대비, 시설비(2014년)

- 교통사업특별회계,도로건설,광역도로건설,동부간선도로확장(녹천교~의정부시계)교통개선분담금,시설비 및 부대비, 시설비(2014년)

바. 설계변경 내역(7차 2회)

구 분		공 사 비(원)			비 고
		당 초	변 경	증․감
전체 (10회)	도급비	170,394,400,000	170,394,400,000	변경없음
	공사기간	‘08. 12. 30 ~ ‘15. 12. 31	‘08. 12. 30 ~ ‘15. 12. 31	변경없음
7차 (2회)	도급비	36,712,000,000	43,482,000,000	증)6,770,000,000	물량변경
	공사기간	‘14. 03. 27 ~ ‘15. 06. 30	‘14. 03.27~ ‘15. 12. 31	6개월 연장

붙임 : 1). 설계변경 방침서 1부.

2). 설계변경 내역서(별도통보) 1부

3). 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	장종환		교량건설과장	이동훈		토목부장	12/08 노우성
협조자
시행	토목부-24320	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 서대문구 충정로3가 동아일보사건물 50	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	3708-2599	/	hjj0128@seoul.go.kr	/	대시민공개