내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약기간연장 의뢰

1. 교통운영과-23039호(2014.12.5) 관련입니다.

2. 내곡지구택지 및 양재동시프트 교통신호기공사 감리용역을 아래와 같이 계약기간연장 의뢰합니다.

가. 계약현황

용역명	계약자	계약금액	계약기간	비고
내곡지구택지 및 양재동시프트 교통신호기공사 감리용역	대영유비텍㈜ 대표 조근환	133,905,000원 (세입세출외현금)	2013. 9.10 ~ 2014.12.31

나. 변경내용

변경내용	당초	변경	비고
계약기간 연장	2013. 9.10 ~ 2014.12.31	2013. 9.27 ~ 2015.11.28	계약금액 변경없음

다. 변경사유 : 선행공정(토목공사) 지연으로 인한 계약기간 연장

붙임 : 1. 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.   끝.

	교통운영과장
주무관	임원성		신호시설팀장	노희천		교통운영과장	12/08 강진동
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	교통운영과-23117	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서울시청별관 1동 6층	/
전화	2133-2484	/전송	2133-1053	/	aeioumoum@seoul.go.kr	/	대시민공개