문서번호	정수시설과-3576
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김종수		12/08 윤종민
협 조
	주무관			변병수

설계변경 심의위원회 개최

(2014 뚝도아리수정수센터 조경관리 용역)

2014. 12

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의위원회 개최

우리 정수센터에서 시행하는 2014년 뚝도아리수정수센터 조경관리 용역에 대한 심의 위원회를 개최하여 설계변경 시행코자 함

□ 설계변경 현황

○ 용 역 명 :『2014년 뚝도아리수정수센터 조경관리 용역』

○ 용역개요

구분	풀깍기	풀뽑기	일반전정	교목전정	초화류식재	교목시비	수목식재
당초	76,260㎡	16,443㎡	105주	107㎡	7,020본	105주	-
변경	90,437㎡	10,962㎡	48주	320㎡	690본	105주	62주
증감	14,177㎡	-5,481㎡	-57주	213㎡	-6,330본	-	62주

○ 용 역 비 : 당초 30,241,830원, 변경 30,152,000원(감 89,830원)

○ 용역기간 : 2014. 04. 30 ∼ 2014. 12. 10

○ 계약업체 : (주)현신 대표 김갑년

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비(기타교체비)

□ 심의위원회 개최 개요

○ 심의위원장 : 정수시설과장

○ 심의위원 : 정수시설과(변병수,곽희영,최양교), 정수과(김진수)

○ 일시 및 장소 :‘14. 12. 8(월) 10:30, 정수시설과

□ 심의내용

❍ 용역물량 증감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경 적정성 심의

- 물량변동 적정성 여부

- 계약변경(증ㆍ감) 물량 및 신규 계약단가 적용 적정성 여부

- 제경비 적정 산정 및 적용의 적정성 여부 등

설계변경 심의위원회

□ 일  시 : ‘14. 12. 8(월) 10:30

□ 장  소 :  정수시설과

□ 안  건 : 2014년 뚝도아리수정수센터 조경관리 용역

설계변경 심의

□ 설계변경 사유 : 물량 증ㆍ감 및 신규 공종 발생

□ 심의결과

구 분	직위	심의결과	성 명	비 고
위원장	정수시설과장		윤 종 민 (인)
위 원	정수시설과 기계6급		최 양 교 (인)
위 원	정수시설과 전기6급		곽 희 영 (인)
위 원	정수시설과 시설6급		변 병 수 (인)
위 원	정수과 시설7급		김 진 수 (인)

붙임 : 설계변경 관련 서류 각 1부. 끝