내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	정산설계변경 시행 및 계약의뢰(2014년 서소문청사 정보통신분야 연간단가공사)

『2014년 서소문청사 정보통신분야 연간단가공사』에 대하여 아래와 같이 정산 설계변경을 시행코자 하오니 계약에 반영해주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 서소문청사 정보통신분야 연간단가공사

나. 계 약 자 : ㈜에프엔피이엔지,    대표자 : 김용구

다. 계약금액 : 금76,999,000원

라. 공사기간 : 2014. 02. 27 ~ 2015. 02. 28

마. 변경내용 : 감)1,178,516원

구 분		금 액(원)			비고
		변경전	변경후	감액
총 공 사 비		76,999,000	75,820,484	-1,178,516
도급비	공급가액	69,999,090	68,927,713	-1,071,377
	부가가치세	6,999,910	6,892,771	-107,139
	계	76,999,000	75,820,484	-1,178,516

붙   임 : 1. 보고서 1부

2. 변경설계서 1부

3. 합의각서 1부. 끝.

	총무과장
주무관	김남학		통신관리팀장	김완집		총무과장	12/08 이혜경
협조자
시행	총무과-32779	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 세종대로110	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	(02)731-6219	/		/	부분공개(7)