투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	안암2교 내진성능보강공사 설계변경 정산 시행

1. 우리사업소에서 공사 시행중인 「안암2교 내진성능보강공사」에 대한 설계변경을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 설계변경 내역

- 공 사 명 : 안암2교 내진성능보강공사

- 공사기간 : 2014. 5. 1 ~ 2014. 12. 12

- 시 공 사 : 씨엔에스건설(주) 대표 신혜숙

- 변경사유 : 공사 실정보고 및 실공사 실측에 의한 물량 증감

- 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	892,907,300	837,346,400	감)55,560,900
도 급 비	864,787,000	828,960,000	감)35,827,000
관 급 비	9,825,200	8,386,400	감)1,438,800
이 전 비	18,295,100	-	감)18,295,100

나. 예산과목

- 도시개발특별회계, 도로시설과, 교량관리, 일반교량관리, 안암2교 내진                    성능보강공사, 시설비(401-01)

붙임 : 1) 설계변경 검토보고서 1부

2) 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관	이광신		시설보수과장	정재현		북부도로사업소장	12/08 이승진
협조자	계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-8761	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 한천로 913(번동365-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)944-5451	/전송	02)945-5073	/	kslee0317@seoul.go.kr	/	대시민공개