	성북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사(감독) 기간 연장 알림

1. 본부 재난대응과-28693(2014.12.8.)호 「소방용수시설 도색 및 보온공사 준공검사(감독) 기간 연장 알림」 과 관련입니다.

2.「2014년 소방용수시설 도색 및 보온공사」 준공확인 요청에 따른 검사(수)기간을 다음과 같이 변경 연장하니 각119안전센터는 검수 완료 후 2014. 12. 22.(월)한 제출하시기 바랍니다.

가. 공  사  명 : 2014년 소방용수시설 도색 및 보온공사

나. 변 경 사 항 : 검수기간(7일 연장)

구분	검수기간	비고(연장사유)
변경 전	2014. 12. 1 ~ 12. 14	검수수량 과다 (7일 연장)
변경 후	2014. 12. 1 ~ 12. 21

끝.

	대응관리과장
수신자	각 센터
담당자	송영운		대응총괄팀장	박일남		대응관리과장	전결 12/08 정종술
협조자
시행	대응관리과-9806	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/	www.fire.seoul.kr/seongbuk
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	대시민공개