문서번호	교량보수과-3775
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	성동도로사업소장
김형섭		박춘배	12/08 정진오
협조

준공기한 연기 요청에 대한 검토결과 보고

(동호대교 남단 진입램프 개량공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

성동도로사업소

(교량보수과)

준공기한 연기 요청에 대한 검토결과 보고

(동호대교 남단 진입램프 개량공사)

우리사업소에서 추진하고 있는 『동호대교 남단 진입램프 개량공사』에 대하여 공사감독 위탁업무를 수행하고 있는 시설관리공단으로부터 제출된 준공기한 연기 요청에 대한 검토 보고임.

□ 공사 현황

◦ 공 사 명 : 동호대교 남단 진입램프 개량공사

◦ 공사기간 : 2014. 7. 16 ~ 2014. 12. 12

◦ 도 급 비 : 955,488,880원

◦ 도 급 사 : ㈜두양종합건설 대표 김병주

◦ 감독기관 : 시설관리공단 공사감독2처(감독 이정복)

◦ 공사개요

- 슬래브 철거 및 재설치 B=7.6m, L=60m

- 가설교량 설치 및 철거 B=6.0m, L=60m

- 교면방수 및 포장 9.5@

- 신축이음장치 교체 3개소, 기타 1식

□ 실정보고사항

◦ 관련근거 : 준공기한 연기 검토 보고서 제출(공사감독2처-21006, ‘14.12.5)

◦ 공단보고 내용

1) 준공기한 연기사유

- 하천점용공사 수방기간 사유로 허가 지연(하천점용승인일 : 2014.9.25.)

- 가도성토 수량 증가로 인한 토공사 기간증가

- 가설교각 설치위치 지장물(광역상수도관)로 인한 가설교량 선형변경 검토

- 중요 구조물 품질확보를 위한 동절기 콘크리트 타설 연기

2) 준공기한 연기 내용

- 연기 적용일수 : 139일 반영

- 공사기간 : 당초) 2014. 7. 15 ~ 2014.12. 12

변경) 2014. 7. 15 ~ 2015. 4. 30

- 연기사유 귀책소재 : 도급사 책임 없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 검토의견

◦ 공단으로부터 제출된 실정 보고내용을 검토한 바, 수방기간 하천점용공사 중지 및 지장물로 인한 선형검토 등에 따라 공기연장 사유가 인정되며, 그에 따른 슬래브 콘크리트 타설 공종이 동절기에 해당되어 공사의 품질확보 차원에서 공사기간을 2015. 4. 30.까지 연장하여 공사를 추진함이 타당하다고 판단됨.

□ 조치계획

◦ 상기 검토의견과 같이 공사기간을 2015. 4. 30.까지 연장요청 건에 대하여  승인하고 잔여 공사의 품질확보 및 안전관리에 만전을 기하고자 하며,

◦ 공사계약부서(재무과)에 공사기간 연장 변경계약을 요청하고자 함.

붙 임 : 1) 준공기한 연기 검토 보고(시설공단) 1부. 끝.