함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	고도정수반장
(경유)
제 목	건설사업관리용역 변경계약체결 통보

1. 시설안전부 고도정수반-6179(2014.12.4.)호와 관련입니다.

2. 『구의정수장 재건설 및 고도정수처리건설 건설사업관리 용역 7차』에 대한 변경계약을 아래와 같이 체결하고 통보 합니다.

가. 계약자 :***********************

나. 용역개요 : *************************************

다. 용역기간

- 총 차 분 : ’09.04.23.∼’15.01.20

- 7차분(1회) : ’14.01.02.∼’14.12.18

라. 변경내역

(단위:천원)

구분	당초		변경		비고
	용역기간	계약금액	용역기간	계약금액
총차분	‘09.4.23∼’15.1.20	5,042,675	‘09.4.23∼’15.1.20	5,080,438	계약기간 : 변경없음 금액증감 : 증)37,763
7차분	‘14.1.2∼’14.12.18	1,027,000	‘14.1.2∼’15.1.20	1,125,189	계약기간 : 증 33일 금액증감 : 증98,189

마. 변경사유

- 일부 감리원(토목, 건축, 전기 등)배치 재조정사항 반영

- 당초 총차계약기간은 ‘09.4.23∼’15.1.20까지였으나, 예산부족으로 ‘14.12.18

까지 계약됨에 따라 부족예산 확보하여 계약기간 연장

바. 계약보증금(보증기간 연장)

- 추가보증금 : 총차분 변경후 계약금액  5.080,438천원의 10%

- 보증기간  : 2009.04.23 ~ 2015.01.20

붙임 : 1. 공사변경계약서(초안) 1부.

2. 합의서등 각 1부.  끝.

	재무회계과장
주무관	한희균		재무회계과장	12/08 조두업
협조자
시행	재무회계과-15835	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 (합동 27-1)	/
전화	02-3146-1035	/전송	02-3146-1059	/	hhk011@seoul.go.kr	/	부분공개(5)