함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 심의회 개최［2014년 도봉,노원구 관내 상수도시설물설치 및 소화전신설,보수공사(장기계속단가계약)］ -설계변경(2회)

우리 사업소에서 시행중인 “2014년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(장기계속)”에 대하여 당초 계약물량 외 신규공종 발생 및 물량 증․감 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최코자 합니다.

가. 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 도봉,노원구 관내 상수도시설물 및 소화전설치보수공사(장기계속)

○ 주요 변경물량

구분	공 종	변 경 내 역		비 고
		당 초	변 경
주요 변경물량	소화전 신설	57	47	감) 10
	K.P 이탈방지압륜 접합	4	17	증) 13
	원형변실설치공(기초재생PE)	2	6	증) 4
	고압블록 포장걷기	1	2	증) 1

○ 계약기간 : 2014.06.02 ~ 2015.05.31

○ 도급비 변경내역

- 당   초 : 금471,907,590원

- 변경 후 : 금471,907,590원

○ 계약업체 : (주)이랑개발 대표 김병관

나. 심의회 개최

○ 심의일정 : 2014. 12. 08(월) 14:00

○ 심의장소 : 급수운영과

○ 심의위원장 : 급수운영과장

○ 심의의원 : 시설7급 김종필, 시설7급 강대유, 시설7급 연제관, 시설7급 유광창

다. 심의내용

○ 신규공종 및 계약물량 증․감에 대한 설계변경 사항

- 물량변동의 적정성 여부

- 계약 변동(증․감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

○ 위 사항을 검토 및 심의하고 심의 결과에 의거 설계변경 조치

따로붙임 :  1. 설계변경 심의신청서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경내역서 1부. 끝.

주무관	문병희		급수운영과장	12/08 김수영
협조자
시행	급수운영과-22781	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/	mbbhh0309@seoul.go.kr	/	대시민공개