문서번호	재생지원과-2739
결재일자	2013.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	실태조사사업팀장	재생지원과장		주거재생정책관
허동	김용덕	배경섭		03/05 진희선
협 조	재생지원계획팀장		임인구
	실태조사관리팀장		조남성

실태조사용역 주간공정 회의결과 보고 (21차)

2013. 2.

주 택 정 책 실

(재생지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

실태조사용역 주간공정 회의결과 보고(21차)

우리시에서 시행중인 정비예정구역 실태조사 용역에 대한 주간공정회의(21차)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

Ⅰ		회의 개요

목    적 : 실태조사 용역 주간공정 보고

일    시 : 2013. 2. 28(목) 10:00∼12:00

장    소 : 신청사 3층 공용회의실

참 석 자 : 17명

❍ 내 부 : 실태조사 사업팀장, 권역별 담당자 8명

❍ 외 부 : 권역별 책임 및 분야별기술자 8명

회의안건

○ 실태조사 용역 공정관리 검토

○ 토지등소유자 명부 확정 및 주민의견청취 통보자료 작성

검토, 사업성추정 가이드라인(변경내용) 교육

○ 기타 현안사항 검토

Ⅱ		회의 결과

대  상 : 75구역【90구역 중 12구역 제외(해제 2건, 해제추진 13건】

공정현황 : 양 호

권 역 명	공 정 율			비고
	계획	실시	대 비
계	86.0	88.5%	102.9%	양 호
북 측 1권역	88.2%	88.2%	100.0%	정 상
북 측 2권역	78.5%	82.7%	105.3%	양 호
동남측 1권역	87.5%	87.6%	100.1%	양 호
동남측 2권역	73.0%	88.4%	118.8%	양 호
서남측 1권역	88.7%	90.7%	102.3%	양 호
서남측 2권역	95.2%	97.3%	102.2%	양 호
뉴타운 1권역	90.0%	90.0%	100.0%	정 상
뉴타운 2권역	86.6%	82.8%	95.6%	부 진

진행내용

○ 주민의견청취 자료 작성

- 토지등소유자 명부확정 : 62구역(진행 : 13구역 )

- 주민통보용자료 작성완료 : 12구역(진행 : 63구역)

※ 도시환경정비사업은 사업성분석 검증T/F완료 후 작성

기타 사항(지시사항)

○ 사업성추정 가이드라인 변경에 따라 임대주택, 이주비 등 사업성분석 재검토

○ 토지등소유자 미확정 구역은 다음주까지 반드시 확정 할 것

○ 주민의견청취 통보 자료 조속히 완료 요망

○ 구역별 정비계획 종상향, 층수완화 등 사유을  작성하여 3.4(월)까지 제출

따로붙임 1) 공정회의 자료 1부.

2) 참석부 1부.

3) 사진대지 1부.  끝.