함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 일시중지 통보

1. 공사감독2처-20805(2014.12.3.)호와 관련입니다.

2. 「서울경찰청~독립문사거리간 송배수관 정비공사」는 겨울철 도로굴착 통제기간까지 공사를 중지하시기 바라며, 아울러 도로굴착 통제로 인하여 공사기간이 부족하므로 준공기한을 연기하고, 시공 변경 사항에 대하여 설계변경 및 재계약을 진행하여 주시기 바랍니다.

1) 준공기한 변경

- 당 초: 2014.08.20. ~ 2015.02.15

- 변 경: 2014.08.20. ~ 2015.05.16

2) 주요 시공변경 사항

- 운형궁앞 D=1000mm관 중간밸브설치 및 단수가 수반되지 않도록 무단수                   (라인스톱핑) 시행

- 독립문사거리 D=600mm, L=84m 추가부설 및 기존관 800mm 내부 충진

- 사직터널구간 시공제외. 끝.

	중부수도사업소장
주무관	김철수		시설관리팀장	최명익		시설관리과장	12/08 나태산
협조자
시행	시설관리과-33106	(		)	접수		(		)
우	100-392	서울 중구 장춘단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2194	/전송	02-3146-2239	/	cjftn08@seoul.go.kr	/	대시민공개