투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 연장 요청

1. 도로보수과-7477호, 기전과-12547호(‘12.12.12)와 관련입니다.

2. 우리본부 시설공사인 「도림천 상류 관악산 저류조 설치공사」의 서울대 정문 앞 교통안전시설물 원인자부담공사를 위 대호로 승인 통보받아 시행중에 있으나 서울대 정문 앞 교통소통대책이 미확정되어 부득이 공사기간을 연장 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사기간 연기내용

당 초	변 경
2012.12.12.～2014.12.31	2012.12.12.～2017.5.30

붙임 : 승인공문 2부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울특별시 남부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 남부도로사업소장(기전과장)
★주무관	조동협		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	12/08 임춘근
협조자
시행	방재시설부-12923	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02-3708-8774	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개