투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장(공사감독2처장)
(경유)
제목	준공기한 연기요청에 대한 승인 통보

1. 공사감독2처-21006(2014.12.5)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 위탁감독 업무 수행중에 있는 『동호대교 남단 진입램프 개량공사』에 대하여 제출된 준공기한 연기 요청 사항의 내용 검토한 바,  준공기한 연기요청 사유와 기간이 적정하다고 판단되어 승인 통보하오니. 향후 공정관리, 품질관리, 안전관리에 철저를 기하여 부실시공이 발생치 않도록 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 시공업체로 하여금 도급계약 변경업무 추진에 차질이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 : 2014. 12.12 → 2015. 4. 30(139일 연기)

나. 지체상금 부과여부 : 미부과. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김형섭		교량보수과장	12/08 박춘배
협조자
시행	교량보수과-3776	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 자동차시장길 41	/
전화	02)2210-1581	/전송	02)2210-1587	/	azkhs@seoul.go.kr	/	대시민공개