문서번호	총무과-12482
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	품질시험소장
김학석		이의기	12/08 권영찬
협조
	★화학시험과장		구흥서

품질시험소 본관 도장공사 설계변경 보고

2014. 12

품질시험소

(총무과)

품질시험소 본관 도장공사 설계변경 보고

품질시험소에서 시행중인「품질시험소 본관 도장공사」와 관련하여 사용부서와 시공사로부터 공사사항에 대한 설계변경사항이 요청되어 아래와 같이 검토 보고 함

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 품질시험소 본관 도장공사

공사기간 : 2014. 11. 17 ~ 2014. 12. 11

공 사 비 : 금87,623,600원

도 급 자 : (주)자오건설 대표 이기완

공사내용 : 본관청사 내외부 도색

Ⅱ		실정보고 검토내용

구 분	내 용	비고
내부도색공사	▶도색작업을 우한 사전 준비작업인 비닐보양의 내역이 누락됨 - 바닥 및 시설물 보양작업(2212.23M2) 추가(신규)
	▶화학시험과 사용 시험실 5개소 도색 추가 - 수성페인트 로울러칠(2,199.07M2) 추가

변경 금액

(단위 : 원)

구 분		공사비			비고
		당 초	변 경	증 감
합 계		131,704,160	143,348,170	증) 11,644,010
도급액	공급가액	79,657,818	85,013,200	증) 5,355,382	백원단위 절사
	부가세	7,965,782	8,501,300	증) 535,518
	소 계	87,623,600	93,514,500	증) 5,890,900

Ⅲ		예 산 검 토

예산집행 내역

(단위 : 원)

구분	예산액	공사비집행액			비고
		발주액 (a)	계약액 (b)	집행잔액 (c=a-b)
품질시험소 본관 도장공사	110,000,000	100,100,000	87,623,600	12,476,400

‣ 예산과목

- 건설공사품질수준향상, 건설공사 품질관리사업, 품질시험소 청사유지 관리, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

Ⅳ		조 치 의 견

상기 검토보고 내용과 같이 설계변경 시행코자 함.

예산 조치사항

‣ 공사비 증액분(5,890,900원)은 예산 집행잔액을 활용하여 예산집행

‣ 설계변경 시행 및 계약변경

붙 임 :1. 변경내역서 1부.

2. 회의록 1부. 끝.