투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사실정보고사항 검토결과 통보(북악터널내부보수보강공사)

1. 공사감독2처-20853호 (2014.12.3)와 관련입니다.

2. 위호 관련 귀 공단에서 제출한『 북악터널 내부 보수 보강공사 』의 실정 보고사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 통보하오니 공사관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 신터널(평창동방향) 천정부 벽체 조명박스 처리 검토건

○ 스텐판 조명박스는 터널건설 당시 설치되어 조명등 위치변경으로 인해  발생된 곳으로서 기존 콘크리트 라이닝은 구조적으로 이상이 없는 것으로 판단 됨으로 귀 공단 의견대로 스텐판 조명박스는 그대로 존치하되 미 제거된 고정볼트는 절단 후  녹제거 및 방청처리 바람.

나. 신터널(평창동방향) 천정부 콘크리트타설 주입구 처리 검토건

○ 구조물상태가 양호하고 돌출면이 소량이므로 귀 공단 의견대로 면갈이하여 표면보수 시행바람.

다. 조적벽체 몰탈마감부 및 손상구간 단면보수 두께 변경 검토건

○ 콘크리트라이닝 벽체 열화부 및 전기 단자함 박스 조적부는 귀 공단 의견대로 심한 손상정도에 따라 단면보수 시행 (실정산 처리)

라. 터널벽체 하부 무근콘크리트 깨기 검토건 (유도등 전선거치용)

○ 구터널내측 타일철거구간 하부 유도등 전선거치부는 귀 공단 의견대로 보도블록 하부 점검구로 이설하고 거치부 잔여 콘크리트는 철거 후 벽체 마감처리 바람.

마. 터널 조인트 보수물량 차수 조정 검토건

○ 터널 조인트 보수구간은 귀 공단 의견대로 벽체부와 천장부의 마무리 단계에서 시행하되 남은 보수비는 내년도 천장부 표면보수물량을 금년도에 선시행하기 바람.

첨  부  : 실정보고 관련서류  1 부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
★주무관	김발현		시설보수과장	12/08 정재현
협조자
시행	시설보수과-8753	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 365-1	/	www.seoul.go.kr
전화	944-5460	/전송	945-5073	/	kbh04099@seoul.go.kr	/	대시민공개