투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	포스코엔지니어링 대표이사
(경유)
제목	전면책임감리용역 중지기간 연장 알림(동부1)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 2007.12.26. 계약체결한 『동부간선도로확장공사(1공구) 전면책임감리용역』은 현재 용역 중단상태로 15. 1월부터 재착수할 예정이었으나 과업에 포함된 「경원선 철도이설 공사」가 완료되지 않아

3. 본 공사가 본격 착수되기 1개월 전인 15.11.월부터 감리용역에 착수할 계획이고, 향후「경원선 철도이설 공사」추진 공정에 따라 감리업무 기간이 변경될 수 있음을 알려드립니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이병환		교량건설과장	이동훈		토목부장	12/08 노우성
협조자	주무관	장종환
시행	토목부-24309	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길15 서소문별관 2동3층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/	topseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개