문서번호	환경보전과-3307
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장		서부공원녹지사업소장
김찬우	이재덕	박웅빈		12/08 안해칠
협 조

- 침출수 집수정 및 이송관로 준설, 집수정 준설 폐기물처리 - 준공기한 연기 검토보고

2014. 12

서부공원녹지사업소

환경보전과

준공기한 연기 검토보고

침출수 집수정 및 이송관로 준설, 집수정 준설 폐기물 처리 진행 중 공사기간이 부족하여 다음과 같이 준공기한을 연기하고자 함

□ 공사개요

❍ 위  치 : 월드컵공원 내

❍ 사업내용

- 침출수 집수정 및 이송관로 준설

· 집수정 11개소 및 이송관로 2,200m

- 집수정 준설 폐기물 처리

· 집수정 11개소 및 이송관로 폐기물

❍ 공사업체

- 침출수 집수정 및 이송관로 준설업체

· 자연엔지니어링(주) 대표 김순영

- 집수정 준설 폐기물 처리업체

· ㈜씨에스그린 대표 권창구

❍ 소요예산

- 침출수 집수정 및 이송관로 준설

· 금49,707,050원(금사천구백칠십만칠천오십원)

- 집수정 준설 폐기물 처리

· 금17,779,300원(금일천칠백칠십칠만구천삼백원)

□ 준공기한 변경사항

❍ 준공기한

- 당 초 : 2014. 12. 09

- 변 경 : 2014. 12. 19

❍ 연기 사유 및 변경내역

- 사유

· 당초 집수정 11개소와 이송관로 2,200m를 준설하고자 하였으나, 처리과정에서 준설처리 퇴적물이 1·2중계펌프장으로 이동하여 쌓임에 따라 중계펌프장 추가준설이 필요함.

- 공사구간(변경내용)

변 경 전	변 경 후	비 고
▶ 집수정 11개소 ▶ 이송관로 2,200m	▶ 집수정 11개소 ▶ 이송관로 2,200m ▶ 1,2중계 펌프장	▶ 1,2중계 펌프장 추가

❍ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

❍ 지체상금 : 미부과

□ 검토의견

❍ 침출수 집수정 및 이송관로 준설처리 과정에서 발생한 퇴적물이 중계펌프장에 쌓임에 따라, 기존 2014.12.9일에서 2014.12.19.일로 준공기한을 변경하여 공사에 만전을 기하고자 함. 끝.