문서번호	시설보수과-9816
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승행		김권일	12/08 조병준
협조

현장 실정보고 사항 검토 보고

(신정교외 2개소 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

강서도로사업소

현장 실정보고 사항 검토 보고

우리사업소에서 시행하는『신정교외 2개소 보수공사』시행중 현장   실정보고 사항이 접수되어 이를 검토하고 보고드림

▶ 관련문서 : 서울특별시 시설관리공단 공사감독1처-12683호(2014. 11.27)

Ⅰ		공사현황

공 사 명 : 신정교외 2개소 보수공사

공사기간 : 2014. 5.26 ~ 2015. 1. 20

공사개요 : 콘크리트표면보수 1,207㎡, 콘크리트 균열보수 875m, 우물통보수 2기 등

도 급 액 : 575,953천원

도 급 자 : 태평로건설㈜  유지연

감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		현장 실정보고 사항 및 검토의견

【신정교】

실정보고 사항

○ 자전거 도로구간내 교량시설물 이정표 추가 설치(당초1개소→변경 2개소)

- 이정표 추가 설치 안양천 자전거 도로 이용객에게 편의 제공

○ 우물통 2기 P5 차수벽 보수 및 물막이 공법 변경 검토

- 신정교 정밀안전진단 자문결과에 의한 P5 보수 시행 및 시설관리공단 기술검토의견에 의하여 당초 쉬트 파일 + 가시설로 설계된 물막이 공법이 현장여건에 맞지 않아 톤마대를 이용한 가설물막이 설치후 우물통 보수

○ 아스팔트 균열보수 수량 증가

- 아스팔트 균열보수를 위한 현장 조사시 아스팔트 노면의 균열이 증가(당초 139.1m → 340m)

【오류고가차도】

실정보고 사항

○ 교량슬라브 하부(S3~4)콘크리트 균열보수시 실내 배드민턴장으로 공간비계 설치를 위해 크레인 진입시 실내 배드민턴장의 목재 마루틀의 파손이 우려

- 공간비계 설치공종을 제외하고 고소작업을 위한 탑재형 크래인을 사용 공기단축 및 예산절감(배드민턴장 파손 예방 민원 방지)

○ 오류고가 슬라브 하부(S2, S3, S7) 균열보수를 위한 공간 비계 및 크레인 등의 고소작업 방법의 물량 누락

- 탑재형 크레인 사용

○ 보도육교(A,B)구간 보수시 노후된 자전거 경사로 강재도장 누락

- 강재도장을 실시하여 자전거 경사로의 내구성 증진

○ 배수홈통 추가작업 지시 사항(A2,P3,P4,P5)

- 배수홈통(원형)을 설치 교량상부의 배수 증진

○ 현장 조사시 당초 설계된 콘크리트 보수 물량외 균열부 및 철근 노출부 조사 추가 반영

- 콘크리트 균열보수(L=31m)와 철근노출 단면(A=7.5㎡)을 보수하여 교량의 내구성 증진

【가리봉철도고가차도】

실정보고 사항

○ 도장보수공중 강재도장 보수공 관련 수량 변경

- 도로시설과 강구조물 시설물 안전점검 결과 사항 추가

○ 한국철도공사 협의 조건 이행

- 철도구간내 보호설비(절연보호관)설치

-  철도운행관리자 및 전기안전관리자 비용누락 및 철도신호공 작업 일수 변경(관련근거 : 가리봉철도교 보수공사 시공협의 회신 시설처 –6683)이행하여 철도구간 작업시 안전을 확보

○ 철근노출부 수량 변경

- 현장 조사시 발견된 철근 노출 단면을 본공사에서 보수 시행

○ 공간비계 설치 및 보호막 설치 수량 변경

- 공간비계 설치 및 보호막 수량을 실정산하여 변경

○ 개략공사비 (단위:천원)			(당초:상단 , 변경:하단)
구 분(직접공사비)	신정교	가리봉철도고가	오류고가	합계	증,감
포장보수공	2,415	-	10,889	13,304	3,488
포장보수공	5,903	-	10,889	16,792
신축이음보수공	13,204	14,166	-	27,370	-
신축이음보수공	13,204	14,166	-	27,370
콘크리트보수공	53,749	33,055	23,924	110,728	24,235
콘크리트보수공	75,391	33,995	25,577	134,963
도장보수공	21,910	18,102	1,003	41,015	444
도장보수공	21,910	18,162	1,387	41,459
강재보수공	3,165	-	21,603	24,768	6,670
강재보수공	3,586	-	27,852	31,438
우물통기초보수공	83,086	-	-	83,086	-42,991
우물통기초보수공	40,095	-	-	40,095
부 대 공	9,730	40,345	20,426	70,501	-1,293
부 대 공	16,873	47,058	5,277	69,208
소 계	187,259	1056,68	77,845	370,772	-9,447
소 계	176,962	113,381	70,982	361,325
교량별 공사비 증,감	-10,297	7,713	-6,863	-9,447

Ⅲ		향후조치 계획

신정교 P5 우물통 기초는 당초 단면보수로 설계되었으나,  현장 조사 결과 차수벽 철근 노출 및 교각 일부 단면보수 사항이 발견되어 P5의 차수벽 철근노출부위를 치핑하고, 속채움콘크리트 타설, 와이어 매쉬 배근 및 이음, 마감콘크리트 타설 예정이며,

신정교 P6 우물통기초에 대한 정밀안전진단업체((주)한국국토안전연구원) 의견서 검토 결과 P5와 동일한 손상으로 갈수기시 우물통 기초의 차수벽이 노출(철근)되는 상태로 미관 및 시설물 유지관리를 고려하여 보수가 필요한 사항으로,

시설관리공단에서 도급비 범위내에서 보수 가능 여부를 검토한 결과 보수 가능하므로 시설관리공단의 실정보고사항과 같이 변경하여 시공하고자 하며 기타 변경 내역이 적정하므로 실정보고  승인처리 하고자 합니다.

붙  임  1. 현장 실정보고서 1부(시설관리공단).

2. 개략공사비 산출내역 각 1부.  끝.