투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경심의 (소)위원회 심의 요청(월드컵대교)

우리부에서 시행중인 『 월드컵대교 건설공사 』의 설계변경(소)위원회 심의를 아래와 같이 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 규    모 : 폭 6차로, 연장 1.98km

나. 공사기간 : 2010. 3.22. ~ 2015. 8.22.

다. 시 공 사 : 삼성물산 외 2개사

라. 감 리 사 : 포스코엔지니어링 외 1개사

마. 설계변경소위원회 심의요청 내용

연번	제 목	증 · 감 (백만원)
		당 초	변 경	증·감
1	북단IC 매립폐기물 처리	5,375	4,888	감) 487
2	주경간(P11, P13) 폐콘크리트 운반비등 수량누락	-	343	증) 343
3	북단IC F램프 신설	-	167	증) 167
4	북단IC 분류하수관 보호공 F구간 선형변경	7,504	7,897	증) 393
5	북단IC 강변북로 가시설 설치 보고	-	106	증) 106
6	북단IC 분류하수관 보호공 말뚝길이 정산	7,937	7,719	감) 218

붙  임 : 설계변경 소위원회 자문 요청서  6부.  끝.

주무관	최진우		토목총괄과장	代최진우		토목부장	12/09 노우성
협조자
시행	토목부-24402	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문동 별관2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2542	/전송	02-3708-2599	/	cjw1116@seoul.go.kr	/	대시민공개