문서번호	토목부-24376
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
손준호		권혁대	12/09 노우성
협조
	주무관		이석우

중랑천 자전거도로 유지보수 결과보고

(응봉교 확장 및 성능개선공사)

2014. 12

도시기반시설본부

(토  목  부)

『응봉교 확장 및 성능개선공사』

중랑천 자전거도로 유지보수 결과보고

중랑천 우안 및 좌안에 콘크리트 포장으로 임시로 설치한 자전거도로가 노후화 및 파손으로 인해 통행지장 및 안전사고 우려가 있다는 민원이 있어 긴급 보수를 시행하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

○ 응봉감 제’14 - 287호(2014. 10.31.) :

실정보고[중랑천 좌·우안 자전거도로 덧씌우기]

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 성동구 응봉동 ~ 성수동 (응봉교)

○ 규    모 : 확     장 - 폭4차로 → 6차로, 연장 625m

성능개선 - DB18 → DB24

○ 사업기간 : 2008.10.20. ~ 2015.12.31.

○ 총사업비 : 78,536백만원 [도급비 : 46,455백만원]

○ 감 리 사 : (주)건화 외1      ○ 시 공 사 : 한신공영(주) 외1

Ⅲ		감리단 보고내용

○ 자전거도로 현황

- 민원 발생부 자전거도로는 공사를 위하여 임시로 우회한 포장두께 10cm의 콘크리트 포장도로임.

- 장기간 사용 및 장마철 침수 및 겨울철 염화칼슘 살포 등 노후화로 인해 포장이 파손되어 시민들의 보행 및 자전거 이용에 불편을 초래하고 있는 실정임.

자전거도로 포장면 파손 현황(중랑천 우안)

자전거도로 포장면 파손 현황(중랑천 좌안)

○ 검토의견

- 노후화 및 파손으로 인하여 통행자들의 불편 및 안전사고 발생 우려로 민원이 있는 실정으로 긴급 보수조치함이 타당하며

- 기존에는 콘크리트 포장면에 대한 균열보수 및 부분보수를 시행하여 왔으나 금회에는 보수범위가 광범위한 바 아스팔트 덧씌우기 5cm로 재포장하여 시민의 편익을 제공코자 함.

○ 조치결과

중랑천(우안)자전거도로 포장유지보수 현황	중랑천(좌안)자전거도로 포장유지보수 현황

○ 적용단가 검토

- 현시점으로 산출한 신규단가에 협의율(69.747+100)/2=84.874%적용

※ 아스콘포장에 대한 기존비목은 있으나, 민원에 의한 추가공사로 시공사의 귀책이 없는 물량증가 사항으로 신규비목으로 산출

○ 공사비 증․감 현황                                  (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
시설비	도급공사비	-	9,240	9,240
	관급자재비	-	12,610	12,610
	폐기물처리비	-	2,664	2,664
	소 계	-	24,514	(증) 24,514

Ⅳ		조 치 계 획

○ 감리단 보고내용을 검토한바 시공사유와 물량 등이 적정한 것으로 사료되므로 추후 설계에 반영하여 정산코자 합니다.

붙  임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.