문서번호	도로보수과-5480
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
하승환		국중진	12/09 정진오
협조

【2014년 노후포장정비구간 노면표시정비공사(2구역)】

설계변경 검토보고

2014.  12.  9.

성동도로사업소

도로보수과

·

설계변경 검토보고

□ 관련근거

○ TR-2-1202(2014.12.08.) 감리원 설계변경 검토보고

□ 공사 현황

○ 공  사  명 : 2014년 노후포장정비구간 노면표시정비공사(2구역)

○ 공사기간 : 2014. 5. 28. ~ 2015. 12. 31.

○ 도  급  자 : 비룡건설 대표 김진범

○ 도  급  비 : 218,284,000원

○ 공사개요 : 차선도색 54,692m, 도로표지병 설치 660개

□ 변경 사유

○ 노후포장도로 하반기 포장추가물량에 따른 공종별 물량 증․감

○ 동일로 시범도로구간 이면도로진입부 횡단보도 재도색 물량 발생(신규공종)

□ 설계변경 내역

구 분	단위	수 량			비고
		당초	변경	증․감
차선 도색	m	54,692	58,674	증3,982
표지병 설치	개	660	798	증138

○ 공사비 변경내역                                            (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총공사비	218,284,000	226,719,000	증8,435,000	사급자재
도급비	218,284,000	226,719,000	증8,435,000

□ 예산과목

○ 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비

□ 조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 공종별 물량조정에 대한 설계변경을 시행하여 차선도색 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율검증 결과 1부. 끝.