투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	남산 및 산하공원 위험수목 정비공사 설계변경 시행

1. 녹지관리과-10793호(2014.10.29)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 발주하여 공사 시행중인 『남산 및 산하공원 위험수목 정비공사』에 대하여 다음과 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 남산 및 산하공원 위험수목 정비공사

나. 공사기간 : 2014. 11. 18 ~ 2014. 12. 27.

다. 도 급 자 : ㈜동림종합조경 대표 강상섭

라. 설계변경 내용 : 별첨

마. 도급비 변경 내역 : 증 18,671,000원

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		126,441,000	145,112,000	18,671,000
도급비	소 계	126,441,000	145,112,000	18,671,000
	공급가액	114,946,364	131,920,000	16,973,636
	부가가치세	11,494,636	13,192,000	1,697,364

바. 예산과목 :  중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 보수정비 사업, 재해 위험수목 제거 및 정비, 시설비및부대비, 시설비(100-401-01)

붙임 : 1. 설계변경 내역보고

2. 변경내역서 1부.  끝.

주무관	구본진		주무관	강병기		녹지관리과장	12/09 김윤철
협조자	주무관	최경진		재무팀장	한선
시행	녹지관리과-12190	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 삼일대로 231(예장동) 남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5940	/전송	02-3783-5949	/	jin997@seoul.go.kr	/	대시민공개