투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	『2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)』 설계변경에 따른 계약의뢰

1. 서부도로사업소 교량보수과-7797호(2014.12.08)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리시에서 시행중인 『2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가-서부)』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가-서부)

나. 공사기간 : 2014.04.09. ~ 2015.02.28

다. 도 급 자 : 케이디엠건설(주) 대표 강영숙

라. 예산과목 : 도시안전실,도로시설과,교량관리,한강교량관리,한강교량 일상유지보수,시설비(205-401-01)

마. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증·감액	비고
공급가액	796,719,410	1,041,478,464	증) 244,759,054
부 가 세	79,671,940	104,147,846	증) 24,475,906
도 급 액	876,391,350	1,145,626,310	증) 269,234,960

바. 설계변경사유 : 추가 배정액 및 물량 증·감에 따른 내역변경 및 신규공종 반영

별첨 : 관련도서 1부.   끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	정병구		주무관	백운경		교량보수과장	12/09 이수근
협조자
시행	교량보수과-7801	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로203 서부도로사업소	/
전화	02)300-8454	/전송	02)300-8454	/	basewaa007@seoul.go.kr	/	대시민공개