내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 풍납동토성 복원 예산 감재배정(5차)

1. 송파구 문화체육과-20780(2014.10. 8)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 2014년도 풍납토성 복원사업 관련 삼표레미콘공장 부지매입코져 하였으나 ㈜삼표에서 보상협의에 응하고 있지 않아 연내 집행이 어려워 삼표레미콘공장 부지 매입비 23,500,000천원을 명시이월 진행중에 있습니다.

3. 풍납토성 복원과 관련 28,304,729천원이 기 배정 되어 있는바, 삼표레미콘공장 보상비 확보를 위하여 기 재배정액중 1,804,729천원을 감배정하여 명시이월액 23,500,000천원을 확보 하고자 합니다.

가. 감재배정 요청

-삼표레미콘공장 부지 보상 명시이월액 : 1,804,729천원

나. 예산감배정내역

(단위:천원)

세부사업	예산 과목	2014 예산액			기배정액			금회감배정액			배정잔액
		국 비	시 비	계	국 비	시 비	계	국비	시비	계
풍납토성복원	총계	35,000,000	15,000,000	50,000,000	19,688,229	8,616,500	28,304,729	1,138,299	666,500	1,804,729	23,500,0000
	시설비	34,961,500	14,983,500	49,945,000	19,649,729	8,600,000	28,249,729	1,138,299	666,500	1,804,729	23,500,0000
	감리비	38,500	16,500	55,000	38,500	16,500	55,000	0	0	0	0

다. 예산과목 :

-역사문화의 계승발전, 문화재보존복원, 풍납토성복원, 시설비 및 부대비,  시설비(401-01).  끝.

주무관	류현수		문화재보존팀장	이은주		역사문화재과장	12/09 황요한
협조자
시행	역사문화재과-26353	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 37번지 시청별관 1동 5층 역사문화재과	/
전화	2133-2626	/전송	768-8873	/	fbgustn2@seoul.go.kr	/	대시민공개