투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	건설폐기물처리용역 설계변경 계약의뢰(강남순환도로4공구, 4차 1회)

1. 우리본부에서 시행하는 「강남순환도시고속도로(4공구) 건설폐기물처리용역(4차)」에 대하여 설계변경(1회)을 시행하고 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 건설폐기물처리용역(4차)

나. 규모 : 폐콘크리트 11,180ton, 폐아스콘 1,185ton,

혼합폐기물 934ton, 금속 및 철재류 28ton

다. 용역사 : ㈜방태 김용남

라. 예산과목 : 도로건설, 도시고속도로망확충(도시개발특별회계), 강남순환도시고속도로건설, 시설비 및 부대비, 시설비

마. 설계변경 내역

- 4차(1회)

구 분	당 초	변 경	증. 감	비 고
용역기간	2014. 4. 1. ~ 2015. 5.31.	2014. 4. 1.~ 2015. 2.28.	감) 3개월
용 역 비	300,000,000	172,440,000	감)127,560,000

바. 변경사유 : 본 공사 시점부 무허가 지장물 철거 집행 지연에 따른 철거물량 감소

붙임 : 1. 설계변경 보고서  1부.

2. 변경 설계서  1부.

3. 감리단 검토보고서  1부.

4. 합의각서  1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	박웅교		도시고속도로과장	명경출		토목부장	12/09 노우성
협조자	주무관	시희식		계약2팀장	홍연화
시행	토목부-24386	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8664	/전송	3708-2599	/	pkyo2425@seoul.go.kr	/	대시민공개