문서번호	도로시설과-21366
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	한강교량팀장	도로시설과장		시설안전정책관
김귀용	하현석	이용심		12/09 한제현
협 조

성산대교 성능개선사업 설계용역

(총괄계약 및 추가과업 시행에 따른 설계변경)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

도 시 안 전 실

(도로시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 ■	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

성산대교 성능개선사업 설계용역

(총괄계약 및 추가과업 시행에 따른 설계변경)

성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 용역 추진중 교량상태를 평가하기 위한 추가조사 및 시험 실시에 따른 추가과업 사항에 대한 설계변경 검토 보고 사항임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 용역

○ 개    요 : 구조안전성 검토, 기본 및 실시설계(L=1,455m, B=27~39m)

○ 용역기간 : 2013.11.1 ~ 2015.4.24 (1차 계약기간 : 2014.12.31)

○ 용 역 비 : 2,206백만원(1차 1,850백만원)

○ 용 역 사 : ㈜평화엔지니어링 외 3개사

□ 추진경위

○ 2013.11. 1  :  설계용역 계약 및 착수

○ 2013.11.18  :  발주처 및 용역사 합동 현장조사

○ 2014. 2.21  :  장래 교통량 예측 및 분석보고

○ 2014. 5.19  :  FCM부재(ECB) 관련 피로해석 및 관리방안 자문회의(1차)

○ 2014. 6.26  :  외부전문가 자문회의 (2차)

○ 2014.10.24  :  외부전문가 자문회의 (3차)

□ 설계변경 내역

(단위 : 천원)

당 초	변 경	증 감	변경사유
2,206,000	2,490,471	증284,471	교량상태를 평가하기 위한 추가조사 및 시험 실시

※ 성산대교 성능개선사업 추가과업 시행계획 방침(도시안전실장,  2014. 7.11.)

□ 추가과업 증액 내역

(단위 : 천원)

추가 과업내용	실정보고 승인일	소요예산	비 고 (관련근거)
소 계		284,471
성산대교 성능개선사업 재하시험 실시 (남단접속교 및 J1램프교)	2014.5.23	25,521	도로시설과-9191 (2014.5.23.)
성산대교 성능개선사업 측량 추가실시	2014.7.10	28,600	도로시설과-12269 (2014.7.10.)
성산대교 용접부 비파괴 시험 실시 (강재 부식두께 조사 포함)	2014.7.14	93,500	도로시설과-12386 (2014.7.14.)
성산대교 피로취약부 변동응력 측정 및 피로수명 평가	2014.11.24	136,850	도로시설과-20500 (2014.11.24.)

□ 예산집행 계획

(단위 : 천원)

총 계약금액 (총차)	2013년 (1차)	2014년 (2차)	2015년 (3차)	비 고
2,490,471	1,850,000	547,000	93,471

□ 조치사항

○ 총차 계약변경이 필요하며 총 계약금액 2,490,471천원중 2014년 예산 547,000천원을 포함하여 2차계약(2,397,000천원)을 체결코자 하며

- 잔여예산 93,471천원은 2015년 예산을 확보하여 3차 계약을 체결코자 함

○ 추가 과업 시행에 소요되는 기간에 대하여 아래와 같이 용역기간을 연장하여 성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계에 추진에 만전을 기하고자 함

- 당초 용역기간 : 2013. 11. 1 ~ 2015. 4. 24

- 변경 용역기간 : 2013. 11. 1 ~ 2015. 10. 31 (6개월 연장)

○ 준공기한 연기 귀책 소재 : 서울특별시

- 연기사유 : 교량상태를 평가하기 위한 추가조사 및 시험실시에 따른 소요기간 반영

붙 임 : 추가과업 시행계획방침서 및 실정보고서 5부.   끝.