문서번호	토목부-24476
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	터널건설과장	토목부장		시설국장
박근우	권혁대	노우성		12/09 이광세
협 조
	주무관		홍상필

준공기한 연기검토 보고(전체, 4차)

(서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

2014. 12

도시기반시설본부

(토   목   부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	계약예규	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

준공기한 연기 검토보고(전체, 4차)

(서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

“서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사”의 준공기한 연기에대한 검토 보고 임(전체 및 4회)

Ⅰ		관련근거

○ 한종(서빙고)제14-285호(2014. 12. 08.) : 공기연장(전체, 4차) 검토보고

○ 공사계약일반조건 제26조(계약기간의 연장)

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 용산구 보광동  ~ 주성동(두무개길 ~ 강변북로)

○ 규    모 : 기존고가 철거 · B=16.0m, L=510m

고가설치 · B=6.4m, L=115m · B=10.4m, L=290m

○ 공사기간 : 총차 2011. 1. 6. ~ 2014.12.31.

4 차 2014. 6. 1. ~ 2014.12.31.

○ 총사업비 : 27,300백만원[도급비 : 19,539백만원]

4차 : 4,000백만원[도급비 : 1,824백만원]

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외1   ○ 시 공 사 : 주식회사 흥화 외1

Ⅲ		보고내용

보고내용

○ 효율적인 예산 미 반영으로 인한 절대공기 부족으로 총괄 공사기한의 연기가 불가피하고

○ 4차공사는 공사시공 중 지장물 저촉(통신케이블, 하수관, 상수관 등)으로 인한 지장물 정비(2개월)로 공사기한 연기가 필요 함.

준공기한 연기검토

○ 전 체 : 2011. 01. 06 ~ 2014. 12. 31

- 연기사유 : 효율적인 예산 미 반영으로 인한 절대공기 부족

- 예산투입현황

(단위 : 백만원)

구 분	총괄	‘10년이전	‘11년	‘12년	‘13년	‘14년	향후
예 산	27,300	1,596	-	5,400	5,000	4,000	11,304

- ‘14년말 완료 공정율 : 57%(가설교량 설치,기존고가 철거,신설교량 하부공)

- 잔여 공정율 : 43%(신설교량 상부공, 가설교량 철거, 부대공)

※ 잔여공정 시공 필요기간 : 12개월

○ 4차분 : 2014. 06. 01 ~ 2014. 12. 31

- 연기사유 : 교각부 지장물 저촉에 따른 지장물 정비(59일)

구 분	연기일수	비고
계	59일
교각기초(P2,P3,P4,A1) 설치 위치에 통신케이블(∮100×30공) 저촉으로 인한 변경	20일
교각기초(P2) 위치 직하부에 하수Box(2.5m×2.5m) 저촉으로 인한 기초 형식 변경	33일
교각 P3, 교대 A1 기초 파일 위치에 폐상수관(D1200)저촉에 따른 제거	6일

준공기한 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
총 괄	2011. 01. 06 ~ 2014. 12. 31	2011. 01. 06 ~ 2015. 12. 31	연기일수 365일
4 차	2014. 06. 01 ~ 2014. 12. 31	2014. 06. 01 ~ 2015. 2. 28	연기일수 59일

Ⅳ		조치계획

○ 감리단 검토의견과 같이 효율적인 예산 미반영 및 현장 여건 변동에 따른 공사기한 연장사유가 타당하므로

○ 총괄 및 4차분에 대하여 준공기한 연기 조치하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 감리단 검토보고서 1부.  끝.