문서번호	재생지원과-3161
결재일자	2013.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	실태조사사업팀장	재생지원과장		주거재생정책관
허동	代허동	배경섭		03/12 진희선
협 조	재생지원계획팀장		임인구
	실태조사관리팀장		조남성

실태조사용역 주간공정 회의결과 보고 (22차)

2013. 2.

주 택 정 책 실

(재생지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

실태조사용역 주간공정 회의결과 보고(22차)

우리시에서 시행중인 정비예정구역 실태조사 용역에 대한 주간공정회의(22차)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

Ⅰ		회의 개요

목    적 : 실태조사 용역 주간공정 보고

일    시 : 2013. 3. 8(금) 16:00∼18:00

장    소 : 신청사 9층 공용회의실

참 석 자 : 17명

○ 내 부 : 실태조사 사업팀장, 권역별 담당자 8명

○ 외 부 : 권역별 책임 및 분야별기술자 8명

회의안건

○ 실태조사 용역 공정관리 검토

○ 가이드 변경에 따른 사업성검증 T/F 추가개최 일정검토

○ 기타 현안사항

Ⅱ		회의 결과

대  상 : 74구역【90구역 중 16구역 제외(해제 13건, 해제추진 3건】

공정현황 : 양 호

권 역 명	공 정 율			비고
	계획	실시	대 비
계	89.3%	89.5%	100.2%	양 호
북 측 1권역	89.3%	89.3%	100.0%	정 상
북 측 2권역	79.0%	83.2%	105.3%	양 호
동남측 1권역	87.5%	87.6%	100.1%	양 호
동남측 2권역	79.7 %	89.3 %	112.0 %	양 호
서남측 1권역	89.8%	91.7%	102.1%	양 호
서남측 2권역	96.2%	97.7%	101.6%	양 호
뉴타운 1권역	91.0%	91.0%	100.0%	정 상
뉴타운 2권역	88.6%	85.8%	96.8%	부 진

진행내용

○ 주민의견청취 자료 작성

- 토지등소유자 명부확정 완료: 62구역(진행 : 12구역 )

- 주민통보용자료 작성완료 : 18구역(진행 : 56구역)

※ 도시환경정비사업은 사업성분석 검증T/F완료 후 작성

기타 사항(지시사항)

○ 사업성추정 가이드라인(주거이전비, 임대주택, 무이자이자 등) 변경에 따라 사업성검증 T/F 추가개최(해당 구역)

○ 사업성검증 T/F 끝난 후 주민의견청취자료 완료일정 다시 제출

따로붙임 1) 공정회의 자료 1부.

2) 참석자 명부 1부.

3) 사진대지 1부.  끝.