투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(계약금액 조정 요청에 대한 검토 보고 지시)

1.업무지시현장 :  구리암사대교 건설공사 (주)도화엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2014-12-09 00:12:00

3.지 시 내 용:

1. 현건업 2014-442호(2014.12.9.)와 관련입니다.

2. 구리암사대교건설공사 시공사인 ㈜현대건설로 부터 공사기간 연장에 따른 계약금액 조정 요청이 있어 아래와 같이 검토지시하오니 검토결과를 2014.12.12.한 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 계약상대자의 책임없는 사유로 공기 연장 기간 검토

나. 검토된 공기 기간동안 발생한 비용을 실비 범위안에서 산출했는지 여부

다. 시간의 변동에 따라 증감하는 비목만을 산출하였는지 여부

첨부 : 계약금액조정보고서 1부. 끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

- 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송

후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							조양연			광역도로과장					최광무					토목부장					12/09 노우성
협조자
시행			토목부-24475									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		0237082557						/전송			0237082599					/	choaral@seoul.go.kr												/	대시민공개