문서번호	정수과-9537
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
안영환		현인식	12/09 임정규
협조
	행정관리과장		안창수

『2014년 정수시설물 청소용역』변경 계약

2014. 12

영등포아리수정수센터(정수과)

정수시설물 청소용역 변경 계약

『2014년 정수시설물 청소용역』과 관련하여 용역 시행결과 및 보험료 실비정산에 따른 변경계약 사항에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

□ 용역계약 현황

○ 계 약 명 : 2014년 영등포아리수정수센터 정수시설물 청소용역

○ 용역기간 : 2014. 2. 24 ~ 2014. 12. 15

○ 청소대상 : 정수지, 응집침전지, 여과지, 활성탄지, 막여과 침전지

○ 계약상대 : 금보씨앤씨(주) 대표 박성용

○ 계약금액 : 금94,196,430원

□ 용역시행 결과

○ 실시기간 :  2014. 3.13 ~ 11. 25

○ 청소시설

- 1정수장 : 응집․침전지, 활성탄흡착지, 여과지

- 2정수장 : 정수지, 여과지, 응집․침전지, 활성탄흡착지, 막여과시설

○ 청소시행 물량 : 벽체 144,470㎡, 정수지17,471㎡

구 분	계약물량	시행물량 합계	1정수	2정수	비고
벽체 청소	144,470㎡	144,470㎡	65,511㎡	78,959㎡
정수지 청소	17,471㎡	17,471㎡	-	17,471㎡

- 1정수장 청소내역 : 벽체65,511㎡

구 분	주벽청소량(㎡)	비 고
응 집 지	12,832	2회
침 전 지	39,168	2회
여 과 지	5,715	1회
활성탄흡착지	7,796	2회
계	65,511

- 2정수장 청소내역 : 벽체78,959㎡, 정수지17,471㎡

구 분	주벽청소량(㎡)	비 고
응 집 지	19,118	2회
침 전 지	37,616	3회
여과지	13,383	3회
활성탄 흡착지	7,548	3회
막여과지	1,294	1회
벽체 합계	78,959
정수지	17,471	1회

○ 청소현황 사진

- 1정수장 : 응집․침전지, 활성탄흡착지, 여과지

침전지	활성탄지	여과지	막여과 침전지

- 2정수장 : 정수지, 여과지, 응집․침전지, 활성탄흡착지, 막여과침전지

정수지	여과지	침전지	활성탄지

□ 변경계약 사항

○ 변경사유 : 보험료 실비정산

- 국민연금 : 감액 금3,332,162원

- 건강보험 : 감액 금2,217,739원

- 노인장기요양보험 : 감액 금145,261원

○ 변경금액 내역

- 당초 : 금94,196,430원

- 변경 : 금86,960,720원

구 분	당초	변경	증감	비고
계	94,196,430	86,960,720	감7,235,710
공급가액	85,633,118	79,055,200	감6,577,918	-국민연금, 건강보험, 노인요양 보험금액 감액(서류 미제출) -보험료 감액에 따른 연동부분 감액
부가세	8,563,312	7,905,520	감657,792

□ 향후 일정

○ 2014. 12.  9 : 변경계약 시행

○ 2012. 12. 10 : 변경계약 의뢰(행정관리과)

○ 2012. 12. 12 : 변경계약 체결

○ 2012. 12. 15 : 준공검사

붙 임 : 1. 변경 내역서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.