보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이승환	김기상	12/09 장시명

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여 관악구 봉천동 급수공사 업무수행 중 아래와 같은 사항으로 보고합니다.

▢ 현 황

연번	위 치	공사개요	작업지시 번호	비 고
1	관악구 행운동 1692-22외 1필지	D=30mm, L=6m	신설-181
2	관악구 행운동 1692-2	D=30mm, L=6m	신설-182
3	관악구 청룡동 1583-16	D=30mm, L=5m	신설-184

▢ 보고 내용

○ 상기 공사건에 대하여 작업지시를 하였으나, 수요가의 공사현장의 자재적치 및 아시바 미철거로 인하여 부득이 공사연기가 필요한 실정임

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
신설-181	’14.11.27. ~ 12.09.	’14.11.27. ~ 12.20.
신설-182	’14.11.27. ~ 12.09.	’14.11.27. ~ 12.19.
신설-184	’14.11.28. ~ 12.09.	’14.11.28. ~ 12.19.

붙임 : 상수도공사 연기원 1부.(별도첨부)  끝.