급수공사 준공 연기 보고(신설 141)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
박종대	代강재성	12/09 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-30698

2014년 성동구 상수도공사(장기계속단가계약) 감독업무 수행중 급수공사 준공기간 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2014. 12. 09.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 박종대

공사현황

공사명 : 2014년 성동구 상수도공사(장기계속단가계약)

도급자 : 파라오건설(주) 대표 정순길

공사현황

연번	접수번호	공사종류	위 치	수요가명	공사기간	비고
1	201410150081	신설 -141	**************	***	‘14.11.29 ~ ’14.12.09

연기요청사유

사유 : 계량기BOX 설치 장소에 건축 자재가 적치되어 있고, 현장 구조물(비계 및 휀스) 등이 미철거 되어 적치된 자재 이동 및 구조물 철거 시까지 급수공사 연기코자 함.

검토결과

상기와 같은 사유로 상수도 급수공사 준공기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	**************	***	‘14.11.29 ~ ’14.12.09	‘14.11.29. ~ ’14.12.22

귀책사유 : 동부수도사업소장

지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 급수공사연기 요청서 1부. 끝.