문서번호	총무과-15044
결재일자	2014.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
윤수희		김영선	12/09 이인숙
협조
	주무관		윤석존

몽촌역사관 관람 및 교육환경 제고를 위한

몽촌역사관 발굴체험전시 설치계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

(몽 촌 역 사 관)

몽촌역사관 관람 및 교육환경 제고를 위한

몽촌역사관 발굴체험전시 설치계획(안)

｢시민재산 이용 활성화｣ 및 ｢꿈마을에코뮤제｣와 관련, 몽촌역사관의 시민이용 공간활용도를 높이고 전시환경을 개선하기 위해, 발굴체험전시를 설치하여 몽촌역사관을 찾는 어린이 관람객들의 학습효과 증진 및  ‘체험형 박물관’으로 특성화 하고자 함.

1	사업 개요

□ 사업제목：○ 몽촌역사관 발굴체험전시 설치

□ 추진근거：○ 시유재산 이용 활성화로 시민행복 증진 프로젝트(자산관리과-12944, 2014.10.22)

- 검토결과 : 몽촌역사관은 어린이를 타겟으로 하는 ‘체험형 박물관’으로 특성화

※ 관련 : 시 소유 건물 공간에 대한 활용율 제고(시장지시사항824-17)

○ 몽촌역사관 중장기 발전계획(총무과-15257호, 2013.12.30.)

□ 사업목적： ○ 시민이용 공간활용도를 높이기 위해 발굴체험전시를 설치하고자 함

□ 소요예산：금21,500천원(예정)

2	추진 방향

○ 한성백제유적의 세계문화유산 등재 추진에 대한 대시민 공감대 형성

○ 서울시 ｢시유재산 이용 활성화｣ 및 몽촌역사관 ｢꿈마을에코뮤제｣ 프로젝트 관련, 관람객의 대다수를 차지하는 어린이를 대상으로 하는 ‘체험형 박물관’에 맞는 전시 설치

○ 발굴과정에 대한 어린이의 이해를 돕는 모형과 패널을 설치하여 관람객들의 입체적 이해 도모

3	세부 추진내용

□  발굴체험전시 설치 내역

○ 전시동선상 관람객 몰입도가 떨어지는 코너를 체험코너로 개편설치

- 기존 백제후기문화 및 동아시아문화 코너를 고대 생활유물 쪽으로 이동, 통합전시

- 기존 유물 전시 대신, 발굴과정에 대한 체험전시로 개편

○ 어린이의 쉬운 이해를 돕는 체험형 모형 설치

- 어린이들이 발굴과정을 쉽게 이해할 수 있는 발굴그림 및 체험모형 (유물관찰용 확대경, 라이트박스 이용한 엑스레이 판독기, 인골 및 동물뼈 모형 등)

○ 전시물 설치시 어린이 눈높이에 맞도록 패널형태 보수 및 모형 배치시 높이 조정

- 설명문을 줄이고 그림으로 이해 도모, 패널 높이 조정 (현재보다 10-20cm 낮춤)

- 전시장의 노후화된 이미지 개선, 산뜻한 이미지로 재구성 (통일성 있는 컬러감)

□  시공개요 : 발굴체험전시 설치 1식

- 시공장소 : 몽촌역사관 지상1층 상설전시실 내

- 시공내역 : 패널 교체 및 모형 설치

- 시공기간 : 착수일로부터 28일

- 시공도면 :                                              ※ 붙임문서 참조

4	소요예산 및 발주방법

○ 예산금액 : 금21,500,000원(금이천일백오십만원)

구 분	수 량	예 산 액	비 고
전시기획 및 설계도 작성	1식	1,000,000
설명패널 제작	1식	10,000,000
체험모형 제작	1식	10,500,000
총 계 (부가세 포함)		21,500,000

○ 예산과목 : 한성백제박물관 총무과, 선사·고대 역사문화 공간 창조, 관람지원기반 구축, 박물관 유지 운영, 일반운영비, 공공운영비(100-201-02)

○ 계약방법 : 소액수의계약

○ 근    거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 제5호

5	향후 계획

○ 방침 수립 : 2014. 12. 9

○ 설치공사 계약 및 시공 : 2014. 12. 12 ~

붙임 : 시공도면(평면도, 입면도) 각 1부.

※ 성과지표 : 12. 관람서비스 프로그램 운영

13. 관람환경의 적정성.

14. 고객만족도.  끝.